공약연번	삼학도 친수공간 조성 [어린이 테마파크 조성 등]		담당부서
120
			도시문화재과

	최종목표
원도심의 근대역사공간 등 관광자원과 연계하여 외부관광객 유치 및 삼학도 활성화를 위해 다양한 체험 및 놀이공간으로 조성

사업성격	신 규 ● 계 속 ○	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ○ 임기후 ●
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	10 %	총사업비	70,000 백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ○ 일부추진 ● 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2023 ~ 2028

○ 위    치 : 삼학도 일원

○ 사업내용 : 어린이 테마파크, 테마정원, 워터프론트 광장 등

○ 사 업 비 : 70,000백만원

☐ 추진현황

○ 2022. 10 : 삼학도 내 삼학부두 일원 친수공간(어린이테마파크) 등 유원시설 조성 관련 목포지방해양수산청 사전협의

- 삼학부두 일원은 “2030 항만기본계획”에 의거 2030년까지 항만기능을 유지하고 있고 “임시여객터미널”로 2026. 12월까지 사용 계획

○ 2023.  1 ~ 8 : 삼학부두 임시여객선터미널 조성 관련 협의

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	관계기관 협의	해수청 협의 이행(′22.10.)	10%
2023	관계기관 협의	해수청 지속 협의중
2024	관계기관 협의	-
2025	사업구상 및 도시계획 변경 검토	-
2026	실시설계 및 실시계획 인가	-
2027	부지매입 및 공사착공	-
2028	공사 준공	-

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년이후
예산액	70,000	-	450	20,000	20,000	29,550
확보액	-	-	-	-	-	-
집행액	-	-	-	-	-	-

☐ 문제점 및 대책

○ 사업계획 부지가 항만기본계획에 의거 2030년까지 항만기능 유지 및 목포내항 여객부두 건설 및 임시여객선터미널(제주행)로 2026년까지 사용 예정

- 2026년 임시여객선터미널 폐쇄 및 항만기능 유지 필요성 상쇄시 항만기본계획 변경 후 친수공간 조성

☐ 향후계획

○ 2024 ~ 2025 : 해수청 등 관계기관 협의 및 사업구상, 항만기본계획 및 도시계획 검토

○ 2026 ~ 2027 : 실시설계용역 및 사업부지 확보

○ 2027 ~ 2028 : 공사추진 및 준공

담당부서		도시문화재과장 김재성 도심개발팀장 김신철 주무관 김현곤(☎3434)