공약연번	삼학도와 목포 내항간 해상보행교 설치		담당부서
121
			공원녹지과

	최종목표
우리시 삼학도에 경쟁력 있는 관광 랜드마크 조성으로 관광객 2천만 시대를 견인하고 원도심 관광객 유치로 원도심 경제활성화에 기여

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가 ● 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	30 %	총사업비	30,000백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2023. ~ 2026.

○ 위    치 : 삼학도(요트마리나항) ~ 목포내항(물양장)

○ 사 업 량 : 해상보행교 L=350m, B=4m, H=20~30m

○ 사 업 비 : 총 30,000백만원(국비 10,000, 시비 20,000)

☐ 추진현황

○ `23. 4.         : 국토부 2024년 해안 및 내륙권 발전사업 지원사업 신청

○ `23. 7. ~‘24. 1 : 기본구상 및 타당성조사 용역 수행

- 국토부 추진중인 “남해안권 발전종합계획” 변경용역 내용 반영 목표

○ `23. 9.         : 국토부“남해안권 발전종합계획” 반영 의견 제출

※ 시민소통실적(회)

설명회, 세미나	만족도 조사	민간자문, 위원회	언론/방송 보도	기타
1	-	-	-	-

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추 진 계 획	추진실적	누 적 진도율
2022	추진계획 수립 및 행정절차 등 점검 2023년 예산확보	2023년 예산확보	10%
2023	기본구상 및 타당성 조사 “남해안권 발전 종합계획” 반영	기본구상 및 타당성 조사용역 발주	30%
2024	기본 및 실시설계	-	60%
2025	“삼학아트교 공사발주”	-	90%
2026	공사준공 및 도시계획 시설사업 완료보고	-	100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	30,000	0	100	1,000	18,900	10,000
확보액	100	0	100	-	-	-
집행액	35	-	35	-	-	-

☐ 문제점 및 대책

○ “삼학아트교” 건설을 위해서는 많은 예산이 소요되므로 국․도비 예산확보가 절실

- 중앙부처(국토부, 문체부, 해수부 등) 관련사업 집중발굴 및 방문 설명, 정치권과 협조요청 등 예산확보 총력 ※우리시 관련부서 TF팀 구성 등

☐ 향후계획

○ ‘24. 1. ~ ‘24. 12.  : 기본 및 실시설계 용역 수행

○ ‘25. 1. ~ ‘26.  6.  : “삼학아트교”공사 추진

※목차

담당부서		공원녹지과장 최양선 녹지팀장 정장범 주무관 임성기(☎3514)