공약연번	보리마당 개발 및 시화골목 조성		담당부서
123
			도시재생과

	최종목표
쇠퇴하는 보리마당 개발을 통해 지역 활성화 및 주민의 삶의 질을 향상하고, 특색있는 골목길, 언덕을 조성하여 관광객에게 볼거리와 힐링 공간 제공

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	60%	총사업비	23,209백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사 업 명 : 서산동 보리마당 도시재생 뉴딜사업

○ 사업기간 : 2018 ~ 2024

○ 위    치 : 서산동 일원

○ 사 업 량 : 공공편익시설 조성 등 12개 마중물사업

○ 사 업 비 :  23,209백만원(국비 10,000, 도비 1,667, 시비 6,333, 기타 5,209)

☐ 추진현황

○‘17. 12. : 도시재생 뉴딜사업 선정(주거지지원형)

○‘18.  9. : 도시재생 특별위원회 실현가능성 및 타당성평가 통과(국토부)

○‘19.  4. : 서산동 보리마당 도시재생 뉴딜사업, 활성화계획 최초 고시

○‘19.  4. : 마중물사업별 추진

○‘21. 10. : 1차 활성화계획 (중대)변경 고시

○‘22. 10. : 2차 활성화계획 (경미)변경 고시

※ 시민소통실적(회)

설명회, 세미나	만족도 조사	민간자문, 위원회	언론/방송 보도	기타
10회	-	5회	2회	15회 (SNS 등)

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누 적 진도율
2022	· 마중물사업(12개) 추진	· 가로정비 조성(L=140m) · 공공편익시설(경로당) 임시 사용승인	40%
2023	· 공공편익시설(경로당, 주차장) 조성 · 집수리 지원사업 · 보리언덕 조성 · 지붕경관 관리사업 · 순환형 임대주택 조성	· 보리언덕 조성 완료 · 순환형 임대주택 입주	60%
2024	· 보행도로 조성(L=550m) · 청년문화예술 창작촌 조성 · 행복커뮤니티센터 조성	-	100%

☐ 연차별 예산운영   ※ 계속비 이월 사업

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	23,209	17,986	5,223	-	-	-
확보액	5,223	-	5,223	-	-	-
집행액	4,111	2,848	1,263	-	-	-

☐ 문제점 및 대책

○ 총 사업비 증가, 사업구역 증가 및 마중물사업별 세부내용 조정 등에 대한 「서산동 보리마당 도시재생 뉴딜사업」‘3차 활성화계획’(중대)변경 필요

- 자체지방비 52.09억 확보(‘23년)에 따른 ‘3차 활성화계획’ 변경 접수(‘23. 9. 4.)

☐ 향후계획

○‘23.  9. ~ : 마중물사업 정상 추진(공공편익시설(주차장) 등 10개 사업)

○‘23. 11. : 3차 활성화계획 변경 승인(국토부 ‣ 전라남도 ‣ 목포시)

○‘23. 11. ~‘24. 12. : 보행도로(경관길) 및 창작촌 등 도시관리계획 인가 결정에 따른 사업 추진

※목차

담당부서		도시재생과장 김현종 주거지재생팀장 오상현 주무관 나광열(☎3685)