지방재정 특수공시 대상사업(안)

【기준년도 : 2012년도】

연번	사 업 명	추진부서	비고
	10개 사업
1	어린이바다과학관 건립	자연사박물관
2	노벨평화상 기념관 건립	문화예술과
3	철도폐선부지 웰빙공원 조성	도시계획과
4	신흥 재해위험지구 정비	건설방재과
5	서남방송국～본옥동간 도로개설	건설방재과
6	양을산 산림욕장 조성	공원과
7	도시 숲 조성사업	경관사업과
8	다목적 체육관 건립	스포츠산업과
9	삼학도 복원화 사업	원도심사업과
10	용당배수 펌프장 신설	하수과

목포어린이바다과학관 건립

국내 최초 어린이 바다체험과학관 건립으로  국가적  해양과학 교육기반 구축과 미래의 주역인 어린이들에게 바다와 관련한 진취적인 기상을 고취

□ 개  요

○ 기    간 : 2007 ~ 2013

○ 위    치 : 목포시 산정동 1454번지(삼학도 근린공원 내)

○ 총사업비 : 117억원 [국비 65, 도비 2, 시비 50]

- 2012년 사업비 : 44억원 (국비 35, 시비 9)

○ 사업내용 : 바다를 주제로 다양한 상설 체험시설, 4D 입체영상관

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년이후
계	11,700	7,300	4,400	-	-
국비	6,500	3,000	3,500	-	-
도비	200	200	-	-	-
시비	5,000	4,100	900	-	-

□ ‘12년까지 추진실적

○ 어린이바다체험과학관 건립 착공                  : ‘09. 7. 15

○ 토목 및 건축공사 완료                           : ‘12. 5. 30

○ 기계, 전기, 통신, 경관조명, 조경 공사 완료        : ‘12. 6. 30

○ 소방공사 완료                                   : ‘12. 9. 30

○ 전시시설, 모형, 영상, 패널 전시공사 완료          : ‘12. 12. 31

□ 향후 추진계획

○ 어린이바다과학관 개관                          : ‘13. 2. 5

○ 과학관 등록 및 운영                              : ‘13. 5 ~

□ 기대효과

○ 전국적 인지도를 가진 일류 과학관으로서 활성화 도모

□ 위 치 도

□ 완공사진

김대중노벨평화상 기념관 건립

민주주의와 남북통일, 세계평화와 번영을 위해 공헌하신 故김대중 前대통령님의 업적 계승발전과 한국인 최초의 노벨평화상 수상을 기념

□ 개  요

○ 기    간 : 2010. 08. 06 ∼ 2013. 7. 15

○ 위    치 : 목포시 삼학로 92번길 (중 삼학도)

○ 총사업비 : 20,000백만원 (국 : 10,000, 도 : 4,000, 시 : 6,000)

- 2012년 사업비 : 5,500백만원 (국 : 3,000, 도 : 1,000, 시 : 1,500)

○ 사업내용 : 부지 15,600㎡, 연면적 4,677㎡(지상 2층, 높이 14.1m)

- 전 시 동 : 전시실(1~4실), 영상실, 휴게시설, 관리실 등

- 컨벤션동 : 자료열람실, 교육회의실

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년이후
계	20,000	11,000	5,500	3,500
국비	10,000	6,000	3,000	1,000
도비	4,000	2,500	1,000	500
시비	6,000	2,500	1,500	2,000

□ ‘12년까지 추진실적

○  ‘08. 02월 : 故김대중 前대통령 목포방문시 기념관 건립 계획 보고

○  ‘11. 09월 : 건립공사 착공(9. 5(월), 11시)

○  ‘12. 05월 : 연세대 김대중도서관과 업무협약체결

○ 2013. 06. 15 :「김대중노벨평화상기념관」개관

○ 2013. 07월 :「김대중노벨평화상 기념관」재단법인 설립 허가

□ 향후 추진계획

○ 2013. 08월 : (재)「김대중노벨평화상 기념관」직원채용 공고

○ 2013. 09월 : (재)「김대중노벨평화상 기념관」직원 임용

□ 기대효과

○ 자라나는 청소년들 대상으로 평화의 산 교육장으로 활용

○ 체류형․체험형 관광객 증가로 지역 경제 활성화 효과 거양

□ 위 치 도

대삼학도 삼학도

중삼학도 삼학도

노벨평화상기념관 건립부지

소삼학도 삼학도

□ 완공사진 (조감도)

철도폐선부지 공원조성

도심철도 이전에 따른 철도폐선 부지를 녹지공간으로 확보하여 쾌적한 도시환경 조성 및 시민 편익증진 기여

❐ 사업개요

○ 사업기간 : 2006. 7. ~ 2014. 12.(신활력증진사업 : 5개년계획)

○ 위    치 : 목포시 연동광장 ~ 옥암동 임성리역 앞

○ 사 업 량 : L=6.2km, A=172,637㎡

마을안길 조성 5개 노선 L=5.7km, B=6~15m

○ 총사업비 : 26,500백만원(국비 10,000, 시비 16,500)

- 2012년 사업비 : 2,520백만원 (국 : 1,160, 시 : 1,360)

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

재원별	총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년 이후
계	26,500	12,100	2,520	2,860	9,020
국 비	10,000	3,200	1,160	1,830	3,810
시 비	16,500	8,900	1,360	1,030	5,210

❐ 추진상황

○ ‘12. 12월 : 청호/동목포/송림/이로웰빙공원 L=5km 조성완료

동목포/송림/이로마을안길 L=2km 조성완료

○ ‘13.  7월 : 이로웰빙공원 편의시설확충 및 마을안길 L=0.4km 조성 중

❐ 추진계획

○ ‘13.  8월 : 이로웰빙공원(라이프아파트앞) 편의시설 확충 등

송림/동목포 마을안길 등 조성

○ ‘13. 12월 : 동목포웰빙공원 확장(삼일교회~가나유치원간)

○ ‘14. 1월 ~ ’14. 12월 : 석현공원 및 공원별 마을안길 조성

위  치  도

공사 전경사진

이로공원 공사 전	이로공원 공사 완료

신흥동 절개지(재해위험지구) 정비사업

도로절개지 사면이 높고 급경사 암반의 표면풍화 진행으로 인한 낙석 및

토사붕괴로 차량통제 및 사고위험이 상존 재해위험지구 항구적인 정비

□ 개  요

○ 기    간 : 2012. 3 ~ 13. 12.

○ 위    치 : 신흥동주민센터 앞 도로절개지 일원

○ 총사업비 : 1,922백만원 (국비 1,152, 시비 770)

- 2012년 사업비 : 960백만원 (국비 576, 시비 384)

○ 사업내용 : 도로절개지 정비 L=145.5m, H=10.7~16.2m

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2012년	2013년	비고
계	1,922	0	960	962
국비	1,152	0	576	576
도비	0	0	0	0
시비	770	0	384	386

□ ‘12년까지 추진실적

○ ‘12. 1 ~ 3 : 실시설계

○ ‘12.   3. 14 : 공사착공(총괄 및 1차분) - 절개지정비 L=80.5m

○ ‘12. 12. 30 : 1차분 준공

□ 앞으로 추진계획

○ ‘13.  3. : 2차분 착공 - 절개지정비 L=60.5m

○ ‘13. 12. : 총괄분 및 2차분 준공예정

□ 위치도

○ 신흥동 절개지 : L=245m, H=10~16m ○ 재해위험지구 면적 : 1.6ha 신흥동주민센터 금회시공 145.5m 기시공분 100m
□ 전경사진
신흥 재해 위험지구 L=245m, H=10~16m

서남방송국~본옥동간 도로개설

교통 혼잡을 해소하고 차량 통행을 원활히 하기 위한 연차적 도로개설 추진으로 도로교통망 확보 및 지역간 생활격차 해소

□ 개  요

○ 기    간 : ‘07. 2. 22 ~ 14. 6. 30

○ 위    치 : 서남방송국 ~ 본옥동간

○ 총사업비 : 12,674백만원 (시비 12,674 )

- 2012년 사업비 : 1,500백만원 (시비1,500 )

○ 사업내용 : 도로개설 L=370m, B=20m

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년이후
계	12,674	5,870	1,500	2,300	3,004
국비
도비
시비	12,674	5,870	1,500	2,300	3,004

□ ‘12년까지 추진실적

○ ‘07. 01    : 실시계획 인가고시

○ ‘12. 12. 31 : 보상(2,049백만원) : 토지 40건, 지장물 30건

○ ‘12. 12. 31 : 공사 -토공 119, 383㎥/85,941㎥완료

□ 앞으로 추진계획

○ ‘13. 08. 15 : 토사, 리핑암, 암깍기 완료

○ ‘13. 12. 30 : 옹벽, 육교, 상수도, 배수공 완료

○ ‘14. 12. 30 : 포장공, 법면보호공, 부대공, 가로등 완료

□ 위 치 도

사업구간

(L=370m, B=20m)

□ 위성사진

사업구간

(L=370m, B=20m)

종원나이스빌

신안주택

보해양조

양을산 산림욕장 조성사업

상동 제1수원지 주변 편백나무림을 중심으로 시민들이 편안하게 이용할 수 있는 산림욕장을 조성하여 환경교육, 산림체험등 질 높은 산림휴양서비스를 제공코자 함.

□ 개  요

○ 기    간 : 2012. 7. 9 ～ 2013. 5. 9

○ 위    치 : 목포시 상동 산 34-3번지 일원

○ 총사업비 : 2,000백만원 (국 1,000 도 300 시 700)

- 2012년 사업비 : 950백만원 (국 500 도 150 시 300 )

○ 사업내용 : 산림욕장 16ha 조성

- 계류 261.6㎡, 산책로 데크 879㎡, 목교 8개소, 야외무대 1개소,             너와정자 3, 대나무정자 1동, 등의자 10, 평상 18, 테이블벤치 10,           농구대 1, 화장실 2개소,

- 소나무 외 17종 8,431주, 구절초 외 13종 31,450주 식재

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년이후
계	2,000	650	950	400
국비	1,000	500	500
도비	300	150	150
시비	700	-	300	400

□ ‘12년까지 추진실적

○ 2010. 11.  02 : 목포시 지방재정 투융자 심사 통과

○ 2011. 06.  29 : 조성계획 및 실시설계 용역 최종보고회 개최

○ 2011. 07.  04 : 조성계획 및 실시설계 용역 준공

○ 2012. 07.  09 : 산림욕장 조성사업 착 공

□ 향후 추진계획

○ 2013. 07월 중 : 양을산 산림욕장 개장식 추진

□ 기대효과

○ 양을산을 찾는 시민들에게 체험, 교육, 휴양등 다양하고 수준 높은 산림휴양 서비스 제공

□ 완공사진 (조감도)

도시숲 조성사업

도심에 녹음숲을 조성하여 시민 생활권 환경을 개선하고 쾌적한

가로변 녹화를 통하여 걷고 싶은 보행로를 조성하고 기후변화 대응과

도심열섬화 현상을 저감코자 함

□ 개  요

○ 기    간 : 2007 ~ 2015

○ 위    치 : 목포시 일원

○ 총사업비 : 7,660백만원 (국 3,830  도 455  시 3,375)

- 2012년 사업비 : 1,000백만원 (국 500  도 150  시 350)

○ 사업내용 : 도시숲 및 쌈지공원 조성

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년이후
계	7,660	4,060	1,000	600	2,000
국비	3,830	2,030	500	300	1,000
도비	455	305	150	-	-
시비	3,375	1,725	350	300	1,000

□ ‘12년까지 추진실적

○ 테마가 있는 도시숲을 조성하여 대한민국 공공디자인엑스포 대상(2009)

지자체 녹색도시 우수상(2009) 대한민국 경관대상 우수상(2011) 수여

○ 원도심 도시숲 녹지조성, 옥암 상록숲길 조성, 대반동 쌈지공원 조성,

유달산공원 경관숲 조성 등

□ 향후 추진계획

○ 쾌적한 도심생활 환경개선과 아름다운 경관창출을 위한 도시숲 조성

○ 도시숲 조성지 유지관리 등

□ 기대효과

○ 생활권 주변에 도시숲 및 쌈지공원 조성으로 녹색네트워크를 구축하고 아름다운 도시경관 창출

□ 위 치 도

대반동 쌈지공원 조성

원도심 도시숲 녹지조성

□ 완공사진 (조감도)

원도심 도시숲 녹지조성

대반동 쌈지공원 조성

목포 다목적체육관 건립

주 5일제 정착으로 시민 여가활동, 체육 동호인들이 증가하고 있으므로 소규모 다목적 체육관을 건립하여 시민 건강증진과 축구센터 활성화에 기여

□ 개  요

○ 기    간 : 2011 ～ 2013(3년간)

○ 위    치 : 대양동 950(목포국제축구센터 내)

○ 총사업비 : 7,026백만원(국비 2,070, 시비 4,956)

- 2012년 사업비 : 3,129백만원 (국 1,070, 시 2,059)

○ 사업내용

- 건축 연면적 4,571.56㎡, 경기장 면적 1,176㎡, 규격 24 × 49M

- 용  도 : 배드민턴, 배구, 탁구, 농구, 헨드볼 등 다목적 구장

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년이후
계	7,026	1,296	3,129	2,601
국비	2,070	1,000	1,070	0
도비
시비	4,956	296	2,059	2,601

□ 추진실적

○ 2011. 06. 08. : 공사 착공

○ 2012. 12. 28 : 장애인 편의시설 등 시설보완

○ 2013. 04. 18 : 공사 준공

○ 2013. 05. 18 : 준공식

□ 기대효과

○ 체육시설 인프라시설을 구축하여 각종 대회유치와 축구센터 이용률을 제고하여 지역경제 활성화에 기여

□ 위 치 도

시 청

목포국제

축구센터

□ 완공사진 (조감도)

삼학도 복원화사업 공원조성공사

목포시의 대표적 상징인 삼학도를 친환경 생태공원으로 조성하여 시민 휴게공간 제공 및 관광객 유치

□ 개  요

○ 사업기간 : 2000년 ~ 2015년

○ 위    치 : 목포시 산정동 삼학도 일원

○ 사 업 비 : 1,399억원(국비 487, 지방비 912)

- 2012 사업비 : 3,000백만원 (국비 1,000, 시비 2,000)

○ 사업내용 : 공원조성 574,850㎡, 호안수로 2,2km, 교량 10개소

□ 연도별 투자계획                           (단위:백만원)

재원별	총사업비	2012년까지	2013년	2014년 이후
계	139,921	108,954	8,764	22,203
국 비	48,675	32,975	2,300	13,400
도 비	3,594	3,594	-	-
시 비	87,652	72,385	6,464	8,803

□ ‘12년까지 추진실적

○ ‘04. 12. : 삼학도 복원화사업 공원조성공사(토목) 착수

○ ‘07.  3. : 소삼학도 호안수로 및 산책로 742m, 교량 5개소 개방

○ ‘10.  3. : 호안수로 14Km 통수 및 교량 4개소 , 산책로 4.4㎞ 시민개방

○ ‘11. 12. : 배수갑문 1개소, 파크골프장 조성, 철도횡단구간 호안수로 연결

○ ‘12.  9. : 구)한국제분 공장 철거공사 완료

○ ‘12. 12. : 중앙공원 조성, 구)한국제분 철거부지 산형태 복원 등

□ 향후 추진계획

○ ‘13~’15. : 중앙공원 조성, 구)한국제분부지 산형태 복원, 대흥수산

부지 광장 및 주차장 조성, 교량 1개소 설치, 대공연장

조성, 석탄부두 및 해경전용부지 해변광장 조성 등

□ 기대효과

○ 친환경 친수공간 조성으로 시민 휴게공간 제공 및 관광자원 활용

□ 위 치 도

□ 완공사진 (조감도)

용당배수펌프장 신설공사

재해위험지구로 지정된 용당지구에 대한 배수펌프장 신설을 통하여 만조시 해수면보다 낮은 저지대의 상습침수로부터 시민들의 재산피해 및 불편을 조기 해소

□ 개  요

○ 기    간 : 2009. 5. 26 ~ 2013. 5. 25

○ 위    치 : 목포시 용당동 1069번지 유달경기장내

○ 총사업비 : 16,697백만원 (국 10,018, 시 6,679)

- 2012년 사업비 : 5,100백만원 (국 3,060, 시 2,040   )

○ 사업내용 :

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2012년	2013년
계	16,697	7,464	5,100	4,133
국비	10,018	4,434	3,060	2,524
시비	6,679	3,030	2,040	1,609

□ ‘12년까지 추진실적

○ ‘09.  5.  : 용당배수펌프장 신설공사 착공

○ ‘10. 12.  : 유수지(1/2) A구간 기초콘크리트 타설 완료

○ ‘11. 12.  : 유수지A구간완료, 건축골조공사 및 토출관로설치 공사 완료

○ ‘12. 11.  : 유입수로 및 배수펌프1기설치

□ 향후 추진계획

○ ‘13.  2.  : 마무리 잔여공사 착공

○ ‘13.  5.  : 최종 준공

□ 기대효과

○ 2․3호광장 저지대 침수 예방 및 시민들의 재산과 생명 보호에 기여

□ 위 치 도

□ 완공사진 (조감도)