□ 특수공시 : 지역적 특성을 감안한 특수한 재정운용 상황에 대한 공시

지방재정 특수공시 대상사업 목록

【기준년도 : 2014년도】

연번	사 업 명	추진부서	비고
	6개 사업
1	용당2동 주민센터 신축	회계과
2	목포 종합장사시설 건립	노인장애인과
3	남해안철도(목포∼보성간) 고속화사업	교통행정과
4	철도폐선부지 웰빙공원 조성	도시계획과
5	구)서남방송국～본옥동간 도로개설	도시계획과
6	목포진 복원 역사공원 조성사업	문화예술과

용당2동 주민센터 신축

주민센터 협소와 노후화 및 주차장 부족 등으로 이전 건축이 필요한 용당2동 주민센터 신축하여 동민 중심의 맞춤형 서비스를 제공코자 함

□ 개  요

○ 기    간 : 2013. 2월 ~ 2014. 10월

○ 위    치 : 목포시 백년대로 95-5(용당동)

○ 총사업비 : 1,925백만원 (전액 시비)

- 2014년 사업비 : 1,500백만원

○ 사업내용

- 규    모 : 지상3층 연면적 904.26㎡

- 주요시설 : 민원실, 작은도서관, 다목적실, 주민사랑방, 동대본부 등

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2014년	2015년	2016년이후
계	1,925	425	1,500	-	-
국비	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-
시비	1,925	425	1,500	-	-

□ ‘14년까지 추진실적

○ 시의회 공유재산 관리계획 승인 :  2013. 3. 15

○ 기본 및 실시설계 : 2013. 11. 28 ~ 2014. 2. 15

○ 공사기간 : 2014. 4. 28 ~ 2014. 11.3

○ 주민센터 개청일 : 2014. 12. 9

□ 기대효과

○ 청사시설 이전 신축으로 행정능률 향상 및 주민센터 활성화 도모

○ 복잡 다양해진 대민행정에 대처하고 행정능률 향상

위 치 도

신축부지

목포공고

용호초등학교

문태중․고등학교

3호광장

동아A

유달경기장

장약국사거리

조 감 도

목포 종합장사시설 건립

재래식 화장장 이전 숙원사업 해결과 장례문화의 선진화 및 확산을 위해 민․관 공동으로 장사시설 건립하여 One-Stop 장례서비스 제공

□ 개  요

○ 기    간 : 2010년 ~ 2015년(6년간)

○ 위    치 : 목포시 대양동 764-11번지 일원(부지 61,027㎡)

○ 총사업비 : 12,476백만원 (국5,220 도642 시6,614)

- 2014년 사업비 : 3,731백만원(특교세 1,000, 시비 2,731)

○ 사업내용 : 화장장 3,692㎡(화장로 6기), 봉안당 5천구, 유택동산 등

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2014년	2015년	2016년이후
계	12,476	8,745	3,731	-
국비	5,220	5,220	-	-
도비	642	642	-	-
시비	6,614	2,883	3,731	-

□ ‘14년까지 추진실적

○  장사시설 건립 설계용역 완료 및 실시계획인가

○  대지조성 및 건축공사

□ 향후 추진계획

○ 목포추모공원 준공 및 화장장 시험운영 : 15.  8

○ 목포추모공원 개장 : ‘15. 10

□ 기대효과

○ 최첨단 현대식 장사시설 건립으로 관련민원 해결

○ 장례문화에 대한 의식개선으로 화장률 제고

위 치 도

현대식 종합장사시설 건립

조 감 도

남해안 철도(목포~보성간) 고속화 사업

호남 경부선 연결로 고속철도망 구축을 통해 전국이 반나절 생활권이 가능하며 영․호남 인․물적 교류로 남해안의 경제․관광 활성화 기대

□ 사 업 개 요

○ 기    간 : 2002 ~ 2022

○ 위    치 : 목포 ~ 강진군 ~ 보성군

○ 총사업비 : 13,083억원 (국비),

- 2014년 사업비 : 2억원 (국비) 현상유지비

□ 연도별 투자계획

(단위:억원)

구분	총사업비	기투자	2014년	2015년	2016년이후
계	13,083	758	2	52	2,000
국비	13,083	758	2	52	2,000

□ ‘14년까지 추진실적

○ 2014년까지 760억원 : 계속공사(2개 공구), 실시설계(5개공구, 2004.12)

○ 2015년 공사 재착공

□ 향후 추진계획

○ 호남권과 영남권간의 남해안권 철도확충으로 지역개발촉진과 공동번영을 위해 2016년도 계속공사비 2,000억 국고지원 건의드림

○ 남해안 철도 고속화로 전국 주요거점을 일상 통근 시간대인 90분대 실현 및 물류비용을 절감 등 기대효과 예상되어 영남권과 교류협력 방안 모색

위치도

경전선

경전선

목포~보성간 철도

목포

광주

보성

영암

임성

무안공항

호남선

장흥

강진

철도폐선부지 웰빙공원 조성

철도폐선부지를 웰빙공원으로 조성하여 시민편익 제공 및 건강증진에 기여

□ 개  요

○ 기    간 : 2006. 7. ~ 2015. 12.

○ 위    치 : 연동광장 ~ 옥암동 임성리역 앞

○ 총사업비 : 26,500백만원 (국 10,000 시 16,500)

- 2014년 사업비 : 5,510백만원 (국 3,810 시 1,700)

○ 사업내용 : 공원조성 L=6.2km, A=172,637㎡

마을안길 조성 5개 노선 L=4.1km, B=6~15m

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2013년	2014년	2015년
계	26,500	14,620	3,360	5,510	3,010
국비	10,000	4,360	1,830	3,810	-
도비	-	-	-	-	-
시비	16,500	10,260	1,530	1,700	3,010

□ ‘14년까지 추진실적

○  청호, 동목포, 송림, 이로, 석현 L=5.5km 완료

○  동목포, 송림, 이로마을안길 L=3.3km 완료

□ 향후 추진계획

○  '15. 12 : 석현공원 마무리 L=0.7km(총공사비 23억, 보상비 13억)

마을안길(송림, 이로, 석현) L=0.8km, B=6~10m 추진

철도폐선부지웰빙공원 전구간 유지관리 등 시설물 관리이관

□ 기대효과

○ 폐선부지를 웰빙공원으로 조성하여 시민 삶의 질 향상 및 건강 도시건설

위 치 도

완공사진

구)서남방송국 ~ 본옥동간 도로개설

원도심 북항권역과 신도심을 연결하는 도로를 개설하여 지역간 차량 소통 원활

□ 개  요

○ 기    간 : 2007. 2. ~ 2015. 12.

○ 위    치 : 구)서남방송국 ~ 본옥동간

○ 총사업비 : 12,270백만원 (전액 시비)

- 2014년 사업비 : 2,600백만원

○ 사업내용 : 도로개설(L=370m, B=20m)

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2013년	2014년	2015년 이후
계	12,270	7,370	2,300	2,600	0
국비
도비
시비	12,270	7,370	2,300	2,600

□ ‘14년까지 추진실적

○ ‘06.  2. 27 : 실시설계 완료

○ ‘07.  1.  5 : 실시계획 인가고시

○ ‘07.  2 ~ ’15.  3 : 1 ~ 12차분 공사 완료(도로개설 완료)

□ 향후 추진계획

○ ‘15. 12 : 기타 주민편의시설 보완 후 이관

□ 기대효과

○ 원도심 북항권역과 신도심을 연결하는 도로를 개설하여 지역간 차량 소통 원할

위 치 도

현장사진

목포진 복원 및 역사공원 조성사업

목포 역사의 시발점으로 조선시대의 수군진영인 목포진을 복원·정비하여 역사교육 및 관광자원으로 활용

□ 개  요

○ 기    간 : 2004 ~ 2014(착공 ‘14. 1월)

○ 위    치 : 목포시 만호동 1-6번지 일원

○ 총사업비 : 7,300백만원 (국3,900  도 650 시 2,750)

○ 규    모 : 공원면적 6,601㎡(객사 1동 92.6㎡, 내삼문 16.5㎡)

- 녹   지 : 식재 1800㎡, 포장 980㎡

- 시 설 물 : 정자1, 벤치33, 난간 151m

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2014년	2015년	2016년이후
계	7,300	6,550	750
국비	3,900	3,900
도비	650	650
시비	2,750	2,000	750

□ ‘14년까지 추진실적

○ ‘04.  ~ '10 : 행정절차 이행

․지방재정 투․융자심사, 기본계공유재산 심의․관리계획 승인 등획 수립,

○ ‘11 ~ ‘12.  8 : 문화재 발굴조사 및 토지·지장물 보상 철거 완료

○ '12. 12. : 설계용역 착수

○ ‘14. 12 : 문화재 현상변경, 공원조성 및 건설기술 심의 완료

○ ‘14.  1 : 목포진 객사 및 역사공원 공사 착수

○ '14. 12 : 목포진 역사공원 개장

□ 기대효과

○ 목포 역사의 시발점으로 역사교육 · 관광 인프라 구축

위 치 도

완공사진